Утверждаю:____________________
Генеральный директор 
ООО «УК «Загорские дали» Музалева З.А.                                                                                                           
План текущего ремонта на 2016 год ООО «УК «Загорские дали»

п. Загорские дали дом №1	
№ п/п	Вид  работ	Объем   работ	Сроки выполнения	
1	Ремонт ливневых лотков (переходящий с 2015г)	60 п.м.	2 квартал	
2	Ремонт оконных блоков на лестничных клетках с заменой недостающих стекол	16 шт 	3 квартал	
3	Ремонт и покраска цоколя	по периметру 	3 квартал	
4	Установка поручней	12 п.м.	2-3 квартал	
5	Ремонт мусорных клапанов	10 шт	2-3 квартал	
6	Ревизия элеваторов на центральном отоплении (покраска задвижек, набивка сальников)	4 шт	3-4 квартал	
7	Ремонт и замена запорной и регулирующей арматуры в подвале	определяется в ходе осмотра перед началом работ	2-3 квартал.	
8	Смена отдельных участков ГВС в подвале 1 подъезда	определяется в ходе осмотра перед началом работ	1-2 квартал	
9	Ремонт второй группы входных  дверей в подъезд 	4 шт	3-4 квартал	
10	Ремонт входных групп (лестниц, площадок)	4 подъезда	3 квартал	
11	Промывка  дворовой канализации	120 п.м	3-4 квартал	
12	Покраска газовых труб	80 п.м	2-3 квартал	
п. Загорские дали   дом №2	
№ п/п	Вид  работ	Объем   работ	Сроки выполнения	
1	Ремонт ливневых лотков (переходящий с 2015г)	55 п.м.	2-3 квартал	
2	Ревизия элеваторов на центральном отоплении (покраска задвижек, набивка сальников)	4 шт	3-4 квартал	
3	Ремонт и замена запорной и регулирующей арматуры в подвале	определяется в ходе осмотра перед началом работ	3-4 квартал	
4	Ремонт и покраска цоколя	по периметру	2-3 квартал	
5	Ремонт мусорных клапанов	10 шт	2-3 квартал	
6	Герметизация межпанельных швов	304 п.м  	2-3 квартал	
7	Ремонт второй группы входных  дверей в подъезд	4 шт	2-3 квартал	
8	Ремонт оконных блоков на лестничных клетках с заменой недостающих стекол	16 шт	3-4 квартал	
9	Промывка дворовой канализации	120 п.м	2-3 квартал	
10	Установка пандуса	1 шт ( подъезд 3)	2 квартал	
11	Покраска газовых труб	80 м	2-3 квартал	
12	Ремонт и покраска козырьков подъездов	4 шт	2-3 квартал	

п. Загорские дали   дом №3	
№ п/п	Вид  работ	Объем   работ	Сроки выполнения	
1	Ремонт ливневых лотков (переходящий с 2015г)	40 п.м.	2 квартал	
2	Ремонт мусорных клапанов	6 шт	1-2 квартал	
3	Ревизия элеваторов на центральном отоплении (покраска задвижек, набивка сальников)	4 шт	2-3 квартал	
4	Косметический ремонт цветочниц	4 шт	2-3 квартал	
5	Покраска бордюров		2-3 квартал	
6	Замена труб ХВС в подвале	80 п.м.	3 квартал	
7	Ревизия вентканалов	согласно заявок	по договору	
8	Покраска лавочек	3 шт	2-квартал	
9	Ремонт второй группы входных  дверей в подъезд	3 шт	3-4 квартал	
10	Промывка дворовой канализации	120м	3-4 квартал	
11	Покраска газовых труб	50 м	2-3 квартал	

п. Загорские дали   дом №4	
№ п/п	Вид  работ	Объем   работ	Сроки выполнения	
1	Ремонт ливневых лотков (переходящий с 2015г)	45 п.м.	2 квартал	
2	Замена мусорных клапанов	10 шт	2-3 квартал	
3	Замена почтовых ящиков (переходящий 2015г)	24 секции	1 квартал	
4	Ревизия элеваторов на центральном отоплении (покраска задвижек, набивка сальников)	4 шт	2-3 квартал	
5	Ремонт и замена запорной и регулирующей арматуры в подвале	определяется в ходе осмотра перед началом работ	2-3 квартал	
6	Косметический ремонт цветочниц	4 шт	3 квартал	
7	Герметизация межпанельных швов	192 метра	2-3 квартал	
8	Замена отдельных участков труб ГВС в подвале	определяется в ходе осмотра перед началом работ	2-3 квартал	
9	Ревизия вентканалов	согласно заявок	по договору	
10	Косметический ремонт МОП до 2 этажа (переходящий 2015г.)	4 подъезда	1 квартал.	
11	Ремонт и покраска отдельных элементов детского оборудования	определяется в ходе осмотра перед началом работ	2 квартал	
12	Установка светильников на 1 этаже при входе в подъезд   	4 шт	1 квартал	
13	Ремонт оконных блоков на лестничных клетках с заменой недостающих стекол	16 шт	3-4 квартал	
14	Ремонт входных групп (лестниц, площадок)	4 подъезда	3 квартал	
15	Ремонт второй группы входных  дверей в подъезд	4 шт	3-4 квартал	
16	Промывка дворовой канализации	120 п.м	3-4 квартал	
17	Покраска газовых труб	50 п.м	2-3 квартал	
п. Загорские  дали   дом №5	
№ п/п	Вид  работ	Объем   работ	Сроки выполнения	
1	Ремонт ливневых лотков (переходящий с 2015г)	40 п.м.	2 квартал 	
2	Косметический ремонт МОП до 2 этажа (переходящий 2015г.)	4 подъезда	3 квартал 	
3	Замена мусорных клапанов	10 шт	2-3 квартал 	
4	Замена почтовых ящиков	24 секции	2-3 квартал 	
5	Косметический ремонт цветочниц	4 шт	2-3 квартал	
6	Ревизия элеваторов на центральном отоплении (покраска задвижек, набивка сальников)	4 шт	2-3 квартал	
7	Ремонт и замена запорной и регулирующей арматуры в подвале	определяется в ходе осмотра перед началом работ	2-3 квартал 	
8	Герметизация межпанельных  швов	101 п.м	2 квартал 	
9	Ремонт входных групп (лестниц, площадок)	4 подъезда	2-3 квартал	
10	Ремонт второй группы входных  дверей в подъезд	4 шт	2-3 квартал	
11	Ремонт и покраска отдельных элементов детского оборудования	определяется в ходе осмотра перед началом работ	2 квартал 	
12	Установка светильников на входе в подъезд   1 этаж	4 подъезда	1 квартал 	
13	Ремонт оконных блоков на лестничных клетках с заменой недостающих стекол	16 шт	3-4 квартал	
14	Промывка дворовой канализации	120 п.м	3-4 квартал	
15	Покраска газовых труб	50 п.м.	2-3 квартал